109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 목포시에서 ‘21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
용해2지구∼ 백련펌프장간 하수관거 정비	19,793	15,593	2,500	1,700	-	2022	2011	90
대양이로하수처리분구 연계처리시설	10,481	10,281	200	-	-	2021	2010	100
하수도정비 중점 관리 지역 정비	35,016	28,933	900	2,000	3,183	2023	2014	86
목포화물자동차 공영차고지건립	36,000	23,825	12,175	-	-	2021	2015	100
유달산 목재문화체험장 조성	3,000	-	3,000	-	-	2021	2015	100
목포권광역위생 매립장순환이용 정비사업	33,964	17,727	8,857	2,953	4,427	2022	2016	85.3
동명동송도마을 취약지역개선사업	3,932	2,856	1,076	-	-	2022	2017	92
대성동 주민센터 신축공사	2,517	1,643	874	-	-	2021	2017	100
가톨릭성지 주변 도로개설	2,600	2,342	258	-	-	2021	2017	100
목포 해식애 해안길 조성사업	3,900	2,600	1,300	-	-	2021	2017	100
노벨평화공원 삼학도 테마경관사업	3,400	294	71	3,032	-	2023	2018	20
용해지구 문화시설 건립사업	12,986	612	3,440	8,934	-	2022	2018	37
목포 평화광장 해양레포츠센터 건립	7,500	1,168	-	-	6,332	2025	2018	5
사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
목포종합경기장 건립	92,000	37,400	27,000	27,600	-	2023	2018	44
목포 달리도항· 어망촌항 '슬로우 아일랜드' 조성사업	13,436	9,004	4,432	-	-	2022	2018	80
목포근대역사문화자원 활용 관광 자원화사업	2,000	114	1,846	-	-	2021	2019	100
목포반다비 체육센터 (장애인체육센터)	8,000	-	166	4,000	3,834	2023	2019	30
목포 해변맛길 30리 조성	10,000	100	1,900	4,800	3,200	2023	2019	40
목포 근대문화사길안전한보행환경 개선사업	2,200	663	537	1,000	-	2022	2019	90
목포 관광특구 평화광장 관광지 활성화사업	5,000	2,225	2,775	-	-	2021	2019	100
유달동대반마을 도시취약지역 생활여건개조사업 (새뜰마을사업)	4,539	362	516	3,661	-	2022	2019	19
수산식품수출단지조성	108,890	10,708	1,429	14,286	82,467	2025	2019	40
대양산단 산업용지 진입도로 개설	965	-	965	-	-	2021	2020	100
율도 어촌뉴딜 300사업	12,342	3,177	4,937	4,228	-	2022	2020	50
장좌도 접안시설 및 계류시설 설치사업	1,128	-	1,128	-	-	2021	2020	100
1897 개항문화 거리 지중화 사업	4,800	600	4,200	-	-	22년	2020	90
미세먼지 차단숲 조성	5,000	1,116	350	3,534	-	2022	2020	60
사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
미세먼지 차단숲 조성	5,000	1,116	350	3,534	-	2022	2020	60
목포시 관광거점 도시 육성사업	97,282	4,300	13,000	10,500	69,482	2025	2020	17.8
서산·온금 재정비 촉진지구 기반시설 조성	39,400	10,895	2,359	1,746	24,400	2024	2020	30
전남스마트공장 테스트베드구축	7,980	2,490	5,490	-	-	2021	2020	100
첨단소재융합제품사용화기반강화	8,187	2,445	4,044	1,698	-	2022	2020	80
전기추진차도선및이동식전원공급시스템개발	45,070	12,350	20,680	4,884	7,156	2024	2020	50
성산 정신요양원 기능보강	3,621	30	1,781	1,810	-	2022	2020	100
구)목포세관창고 활용 복합문화 공간 조성사업	3,580	-	1,004.0	2,576.0	-	2022	2020	100
생생문화재 사업	100	100	100	100	100	2021	2020	100
구)목포세관 문화재권역 관광 활성화 사업	5,000	-	778	1,000	3,000	2023	2020	40
외달도 섬숲 생태복원 사업	1,090	-	1,090	-	-	2022	2020	100
삼학도 천년의 숲 산림공원 조성	1,900	-	20	1,880	-	2023	2020	20
고하도 해상데크 보행약자 진출입 개선	2,350	1,100	1,250	-	-	2022	2020	30
세라믹산단진입 도로개설공사	4,500	361	1,539	2,600	-	2022	2020	95
북항활어위판장 신축공사	5,000	-	602	4,398	-	2022	2020	95
사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
목포어묵세계화기반구축및육성전략	10,000	-	1,559	920	7,521	2023	2020	40
목포 문화재 야행	372.5	372.5	372.5	665	650	2021	2020	100
목포 해상판타지쇼 운영	2,350	-	866	684	800	2022	2021	30
목포 항구축제	2,200	-	202	798	1,200	2023	2021	10
2021 목포 문학박람회	1,500	-	1,500	-	-	2021	2021	100
고하도항, 응박 개항 어촌뉴딜 300	12,341		2,467	4,936	4,938	2023	2021	20
목포시립도서관 독서문화 환경 조성	2,000	-	75	1,925	-	2022	2021	10
수산물유통센터 건립	19,200	-	820	18,380	-	2022	2021	64
죽교동샘골마을 취약지역생활여건개조사업	4,473	-	88	1,347	3,038	2024	2021	2
친환경선박혼합 연로기술개발 및실증	41,480	-	7,530	10,400	23,550	2025	2021	30
산지위생안전 시스템구축사업	3,660	-	810	2,850	-	2022	2021	70
목포 항구 버스킹	660	-	60	300	300	2021	2021	100
용당1동 공영 주차장 주차타워 조성	3,000	-	-	1,500	1,500	2023	2021	1
2022 서남권 뮤지엄 페어	700	-	78	200	400	2024	2021	50

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2021년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

용해2지구∼백련펌프장간 하수관거 정비

담당자

하수과 김선웅(☎270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 용해지구 일원의 배수구역에서 발생되는 우수를 신속히 배제하여 침수방지 및 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2022년

○ 위 치 : 신동마을 ~ 백련펌프장(압해대교 아래)

○ 규 모 : 하수관로 정비 L=1,384m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,793백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	19,793	15,593	2,500	1,700	-
국 비	12,985	12,985	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,808	2,608	2,500	1,700	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ '16. 10. : 공사 착공

○ '17.  9. : 1차분 공사 준공(하수관로 정비 L=406m 및 개거 정비 264m)

○ '18.  6. : 2차분 공사 준공(하수관로 정비 L=140m)

○ '19.  3. : 3차분 공사 준공(하수관로 정비 L=180m)

○ '20.  4. : 4차분 공사 준공(하수관로 정비 L=80m)

○ '20.  5. : 5차분 공사 준공(하수관로 정비 L=31m)

○ '21.  8. : 6차분 공사 준공(하수관로 정비 L=109m)

□ 향후계획

○ '22.  4. : 7차분 공사 준공(하수관로 정비 L=90m)

○ '22. 12. : 8차분(L=84m) 공사 준공 및 정비사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 18,550백만원 → 변경 19,793백만원

○ 사업기간 : 당초 2014~2021 → 변경 2014~2022

사업명

대양이로하수처리분구 연계처리시설

담당자

하수과 우기훈(☎270-8627)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수 미처리구역인 대양하수처리분구의 하수를 북항 하수처리시설에 연계 처리하여 공공수역 수질오염예방과 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2021년

○ 위 치 : 목포시 대양동 국도1호선 대체우회도로 일원

○ 규 모 : 중계펌프장 2개소(대양산단, 월산마을), 압송관 5.1km, 이로중계펌프장 및 대양펌프장 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,481백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,481	10,281	200	-	-
국 비	4,840	4,840	-	-	-
시 도 비	483	483	-	-	-
시군구비	5,158	4,958	200	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ’13.  3. : 공사착공

○ ’16.  6. : 1 ~ 4차분 공사 준공(관로매설완료) 및 이로중계펌프장 준공 및 가동,

대양펌프장 압송관로(5.1km) 완료

○ ’20. 11. : 5차분 공사 준공(대양펌프장 구조물)

○ ’21.  4. : 6차분 공사 준공(대양펌프장 기계설비)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 10,281백만원 → 변경 10,481백만원

○ 사업기간 : 당초 2010~2020 → 변경 2010~2021

사업명

하수도정비 중점관리 지역 정비

담당자

하수과 김선웅(☎270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 30년 빈도 침수피해를 대비하여 하수도정비 중점관리지역으로 지정되어

하수도시설 확충 등 정비를 추진하여 도시침수 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2023년

○ 위 치 : 용당 1·2동, 상동 일원

○ 규 모 : 입암천바닥정비 L=1.31km, 상동지구 방류관로, 상리대하수도 PC  암거 L=121m, 제어관리시스템 1식 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,016백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	35,016	28,933	900	2,000	3,183
국 비	24,511	24,511	-	-	-
시 도 비	500	500	-	-	-
시군구비	10,005	3,922	900	2,000	3,183
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 86%)

○ '13.  2. : 하수도정비 중점관리지역 지정 고시

○ '17.  2. : 1차분 공사 착공

○ '17.  4. : 2차분 공사 착공

○ '18. 11. : 1차분 공사 준공

□ 향후계획

○ '22.  2. : 2차분 공사 준공

○ '23. 12. : 하수도 중점관리지역 정비사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 당초 2013~2020 → 변경 2013~2023

사업명

목포 화물자동차 공영차고지 건립

담당자

교통행정과 정경만(☎270-8293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서해안과 남해안 고속도로의 시‧종점, 무안국제공항, 신항만 등이 위치하여 물류거점 도시로써 원활한 역할을 수행하고, 불법주정차 민원 해결을 통한 쾌적한 교통환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1월 ~ 2021. 12월

○ 위 치 : 대양동 1183, 1186번지

○ 규 모 : 91,476.9㎡(27,671평) / 1,010대(주차장, 휴게‧정비‧관리동 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 36,000백만원(국16,683/시7,142/민간12,175)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	36,000	23,825	12,175	-	-
국 비	16,683	16,683	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,142	7,142	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	12,175	-	12,175	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘18. 11. : 부지매입 및 등기이전 완료

○ ‘19. 11. : 민간사업자 공모 공고

○ ‘19. 12. : 사업계획서 접수

○ ‘20. 12. : 실시계획인가 및 건축허가

○ ‘20. 12. : 공사 착공

○ ‘21. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

유달산 목재문화체험장

담당자

공원녹지과 김현수(☎270-8344)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 목재의 중요성을 홍보하고 다양한 목재문화 체험기회를 제공할 수 있는 공간조성으로 유달산권 관광자원과 연계한 관광객 유치에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2021

○ 위 치 : 목포시 죽교동 267-2번지외 12필지(유달산 달성주차장옆)

○ 규 모 :〔부지면적〕4,246㎡ 〔건축연면적〕856.04㎡, 지하1층/지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3.000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000	-	3,000	-	-
국 비	2,400	-	2,400	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	600	-	600	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 목재문화체험장 조성사업 완료

□ 향후계획

○ ‘21. 9. : 체험장 정상운영

○ ‘22. 9. : 목재문화페스티벌 프로그램 운영(개장 1주년 기념)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

목포권 광역위생매립장 순환이용 정비사업

담당자

자원순환과 이태양(☎270-8585)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매립장의 사용연한이 도래하고 있으나 신규 매립지 확보가 어려우므로 사용

중인 매립장 일부를 굴착 후 재사용함으로써 사용기간 연장

□ 사업개요

○ 기   간 : 2016년 ~ 2022년

○ 위   치 : 목포시 대양로 241-41 일원(목포시 위생매립장 내)

○ 규   모 : 폐기물 굴착 516,000㎥, 선별 645,000㎥, 매립장 조성 34,778㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,964백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	33,964	17,727	8,857	2,953	4,427
국 비	16,100	9,863	2,495	1,400	2,342
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,864	7,864	-	-	-
지 방 채	10,000	-	6,362	1,553	2,085
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85.3%)

○ `16.  3. : 지방재정투자사업 중앙심사 완료

○ `18. 10. : 기본 및 실시설계 용역 · 도 건설기술심의 완료

○ `19.  9. : 시설공사 계약체결 및 착공

○ `20.  5. ~ : 폐기물 굴착·선별 및 압축·포장

□ 향후계획

○ `22.  9. : 차수재 보수 및 설치(매립장 조성)

○ `22. 12. : 매립폐기물 굴착·선별 및 압축·포장작업 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

동명동 송도마을 도시취약지역

담당자

도시재생과 나광열 (☎270-3643)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시 취약지역 주민의 기본적인 생활여건 개선을 위해 안전·위생 등 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량 강화 등 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 2. ~ 2022. 12. <7년>

○ 위 치 : 전남 목포시 동명동 60번지 일원

○ 규 모 : A=14,547㎡, 5개 분야 22개 사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,932백만원(국 2,429, 도 243, 시 1,261)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,932	2,856	1,076	-	-
국 비	2,429	2,176	253	-	-
시 도 비	243	190	53	-	-
시군구비	1,261	490	771	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 92%)

○ ‘21. 10. : 지적재조사 사업 완료

○ ’21. 11. : 도시가스 설치(12세대, L=350m), 골목정원 및 체육공원 조성 완료

○ ’21. 11. : 마을안길 조성, CCTV(5EA) 및 보안등(8EA) 설치 완료

□ 향후계획

○ ‘22. 7. : 커뮤니티센터 준공 및 BF 본인증 취득 완료

○ ’22. 8. : 휴먼케어 및 주민역량강화 용역 완료

○ ’22. 12. : 공동홈(A=165㎡) 조성 완료

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 연장 : 2016. 2. ~ 2019. 12. → 2016. 2. ~ 2022. 12.

○ 사업비 : 4,301백만원(국 3,287, 도 304, 시 710) → 3,932백만원(국 2,429, 도 243, 시 1,261)

※ 2019년까지 미집행 잔여 사업비 불용 처리

사업명

대성동 행정복지센터 청사 신축

담당자

회계과 이제만(☎270-3275)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대성동 천년나무 아파트 입주 등으로 인한 정주여건 변화와 행정복지센터 노후화 및 공간 협소에 따른 청사 신축

□ 사업개요

○ 기 간 :  19. 11. ~ 21. 3

○ 위 치 :  대성동 277- 외 6필지

○ 규 모 :  지상3층 연면적 896㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,517백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,517	1,643	874	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,517	1,643	874(이월)	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ ‘17. 5 전남지방재정투자 심사 승인

○ ’19. 3 청사부지 선정 완료

○ ‘20. 5. 실시설계 완료

○ ’20. 8. 공사착수

○ ’21. 3. 준공 및 개청식

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

가톨릭성지 성미카엘대성당 주변 도로개설

담당자

건설과 김현곤(☎270-3484)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로망 구축으로 교통난을 해소하고 목포도시관리계획 도시계획도로 시행으로 주민숙원사업 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2021

○ 위 치 : 산정동 74-190번지 일원

○ 규 모 : L = 340m, B = 12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,600	2,342	258	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,600	2,342	258	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `18.  1 : 가톨릭 나눔봉사기념관 인근 도로개설 완료 (L=86m, B=12m)

○ `18.  9 : 가톨릭 성미카엘성당 인근 도로개설 완료 (L=74m, B=12m)

○ `21. 12 : 가톨릭 성지 정문 인근 도로개설 완료 (L=180m, B=12m)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

목포 해식애 해안길 조성사업

담당자

관광과 김덕철(☎270-8216)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서남해안 관문에 상징적인 해상데크 및 포토존 설치로 해상케이블카와        연계한 관광인프라 구축으로 관광수요 충족 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 :  2020 ~ 2021

○ 위 치 : 목포시 달동 고하도 해안 일원

○ 규 모 : 데크설치 L=738m(B=2m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,900 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,900	2,600	1,300	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,950	1,300	650	-	-
시군구비	1,950	1,300	650	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(사업완료, 진도 : 100%)

○ `21. 6. : 사업준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

노벨평화공원 삼학도 테마경관 조성사업

담당자

공원녹지과 임성기(☎270-3514)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼학도 공원 내 아름다운 테마경관 조성을 통한 관광객과 시민들에게 다양한 볼거리를 제공 관광도시 랜드마크로써 위상 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2023년

○ 위 치 : 삼학도근린공원 일원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,400	-	368	3,032	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,700	-	184	1,516	-
시군구비	1,700	-	184	1,516	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 삼학도 호안수로 꽃나무 식재 : 2020년 / 212본

○ 중삼학도 꽃누리 섬 조성 : 2020년 / 수선화, 맥문동 등 6종

□ 향후계획

○ 삼학도 테마경관 조성사업 단계별 사업 추진 : 2022 ~ 2023년

- 실시설계 및 공원조성계획 변경 용역(‘22. 11 ~ ’23. 3)

- 공사발주 및 준공 : ‘23. 4 ~ ’23. 12.

□ 사업변경 내역

○ 헤당없음

사업명

용해지구 문화시설 건립사업

담당자

문화예술과 한양주(☎270-8322)

□ 사업목적 및 필요성

○ 용해지구가 새로 조성되어 인구가 증가함에 따라 용해지구 문화시설 용지에 우리시 거점 도서관을 건립하여 문화욕구를 충족하고 주민 삶의 질을 개선하여 사회문화 발전에 이바지 하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 03. 02. ~ 2022. 06. 24.

○ 위 치 : 목포시 용해동 997-1번지

○ 규 모 : 연면적 4,424㎡ (지하1층, 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,986백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,986	612	3,440	8,934	-
국 비	6,295	191	1,809	4,295	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,691	421	1,631	4,639	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)

○ 지하1층, 지상1층 골조작업

○ 콘크리트 타설 및 형틀작업

□ 향후계획

○ 지상2~3층 골조작업 및 콘크리트 타설

○ 내부 인테리어 및 금속 창호 공사, 각종 마무리 마감공사

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 (당초) 2021. 3. 2. ~ 2022. 4. 30 ⇨ (변경) 2021. 3. 2. ~ 2022. 6. 24.

- 철근수급 지연으로 인하여 ‘21. 07. 30. ~ 09. 30.(2개월) 사업중지

사업명

목포 평화광장 해양레포츠센터 건립

담당자

해양항만과 조창우(☎270-3599)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양레포츠 교육·훈련·체험할 수 있는 센터를 건립하여 서남권 해양레포츠 이용인구 저변확대 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019~2022

○ 위 치 : 평화광장 전면수역

○ 규 모 : 센터 1동, 계류시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,500	1,168	-	-	6,332
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,750	887	-	-	2,863
시군구비	3,750	281	-	-	3,469
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ‘16.11. ~ ’18.6. 타당성조사 및 기본계획수립 용역, 전남도 투자심사

○ ‘19. 9 기본 및 실시설계용역 착수

○ ’21. 2 주민설명회 개최

□ 향후계획

○ ’22. 8. : 사업기간 변경 요구(전남도)

○ ’22. 8. ~ ‘23. 5. : 행정절차 이행

○ ’23. 6. : 공사 착공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

목포종합경기장 건립

담당자

교육체육과 박치현(☎270-8323)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2023년 제104회 전국체전 개최의 개․폐회식, 육상경기장으로 활용될 종합경기장 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 12. ~ 2023. 7.

○ 위 치 : 목포시 대양동 산 124번지 일원

○ 규 모 : 연면적 26,468㎡, 지상 3층, 관람석 16,468석

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 92,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	92,000	37,400	27,000	27,600	-
국 비	20,000	8,000	8,000	4,000	-
시 도 비	23,000	13,000	5,000	5,000	-
시군구비	49,000	16,400	14,000	18,600	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 44%)

○ 토목공사 착공                : `19. 12. 9.

○ 총괄 공사 계약               : `20. 10. 28.

○ 2차분 공사 착공 및 추진      : `20. 11. 5.~

□ 향후계획

○ PC공사․스탠드 설치 공사    : `22. 7. ~ 11.

○ 내부마감 공사                : `22. 7. ~ `23. 5.

○ 운동장 조성 공사 추진        : `22. 10. ~ `23. 5.

○ 마감공사 추진                : `23. 6. ~ 7.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

목포 달리도항․어망촌항 슬로우

아일랜드 조성사업

담당자

해양항만과 강기한(☎270-8328)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌 해상교통시설 현대화 및 핵심자원을 활용한 해양관광 활성화를   통한 어민의 지속가능한 소득기반 창출 및 소득주도성장 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 목포시 달리도, 외달도

○ 규 모 : 공통사업 및 특화사업 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,436백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	13,436	9,004	4,432	-	-
국 비	9,405	6,303	3,091	-	-
시 도 비	1,209	810	397	-	-
시군구비	2,822	1,891	944	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ `21. 5. : 달리도항 및 어망촌항 환경정비 완료

□ 향후계획

○ `22. 10. : 외달도 바다자연정원 조성 완료

○ `22. 11. : 달리도 쉬어가 건립공사 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

목포근대역사문화 자원 활용 관광자원화 사업

담당자

도시문화재과 김성찬(8291)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목포 근대문화자원을 활용하여 역사적 가치와 문화적 가치를 알 수 있도록 원형에 맞게 복원하여 문화재 관광지로 조성하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 전라남도 목포시 항동 6-8번지(구 목포세관 창고)

○ 규 모 : 대지면적 6,728.6㎡, 연면적 991.74㎡, 창고 A,B동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,000	114	1,846	-	-
국 비	1,000	57	923	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,000	57	923	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `19. 06. : 문화재 등록 고시(국가등록문화재 제786호)

○ `19. 07. : 구 목포 세관창고 조성사업 실시설계 용역 완료

○ `20. 12. : 문화재청 현상변경 승인 및 전라남도 계약심사 완료

○ `20. 12. : 공사 발주 및 착공

○ `21. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당 시 작성)

구분	당초	변경
사업기간	2019년 ~ 2022년	2019년 ~ 2021년
사업비	4,000백만원(국2,000 시2,000)	2,000백만원(국1,000 시1,000)
사업내용	구 목포세관창고 리모델링 구 목포세관창고 내·외부 복원 시민문화공간 조성 건축관련 기획공간 조성 원도심 근대건축자산 탐방 지원 복합공간 조성 사진 전시 및 3D 영상물 설치 근대역사거리 재현 및 VR 체험공간 조성 음성 서비스 콘텐츠 설치	구 목포세관창고 리모델링 구 목포세관창고 내·외부 복원(외부 붉은벽돌 제외) 및 구조보강 원도심 근대건축자산 탐방 지원 복합공간 조성

사업명

목포 반다비 체육센터(장애인 체육센터) 건립

담당자

교육체육과 노우균(☎270-3677)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2023년 제43회 전국장애인체육대회 개최와 장애인체육 인프라 구축

○ 목포시 장애인 13,830명의 오랜 숙원사업인 장애인형 국민체육시설 건립 및 장애인의 생활체육 참여 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2023년

○ 위 치 : 대양동 산 128-3번지 외 11필지(목포종합경기장 내 부지)

○ 규 모 : 지상2층, 연면적 2,328㎡, 수중재활치료실, 다목적체육관 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2022년 이후
계		8,000	330	4,000	3,834
국 비	4,000	4,000	83	2,000	1,917
시군구비	4,000	4,000	83	2,000	1,917

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 에너지효율등급 인증완료                               : `21. 8. 24.

○ 도 사전 컨설팅 감사완료(감리)                          : `21. 10. 18.

□ 향후계획

○ 목포시 장애인체육회 면담                              : `22. 1. 5.

○ 도 계약심사, 목포시 건설기술심의위원회 사전절차 진행  : `22. 7.

○ 공사계약의뢰 및 착공                                  : `22. 8.

○ 공사완료                                               : `23. 7.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

목포 해변맛길 30리 조성

담당자

공원녹지과 임성기(☎270-3514)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목포시의 아름다운 해변풍광을 연결하여 관광객 및 시민들에게 도보여행 바닷길을 제공하고 문화, 역사 등 주변 관광자원과 연계한 낭만과 맛이 있는 도보 관광자원을 통해 관광도시 이미지 향상 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2023년

○ 위 치 : 목포 평화광장~삼학도~목포항~목포해양대학교

○ 규 모 : 12km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,000	100	1,900	4,800	3,200
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,000	50	950	2,400	1,600
시군구비	5,000	50	950	2,400	1,600
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 목포 해변맛길 30리 조성(1단계) 2, 3구간 개통

□ 향후계획

○ 목포 해변맛길 30리 잔여(1, 4, 5)구간 사업추진 – 2022~2023년

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 : 당초 2020~2022년 ⇒ 변경 2020~2023년

사업명

목포근대문화사실 안전한보행환경개선사업

담당자

건설과 김형중(☎270-3338)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자동차 통행 억제, 교통약자 배려, 보행위험요소 제거 등을 통해 보행자

중심의 안전하고 쾌적한 보행공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 목포시 유달동, 만호동 일원

○ 규 모 : 보행길 정비 1.8km, 안전편의시설 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,200	-	42	623	1,535
국 비	1,000	-	-	300	700
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,200	-	42	323	835
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ ‘19. 5. ~ ’20. 3. : 실시설계 및 주민설명회 추진

○ ’20. 5. ~ ‘22. 6. : 보행환경 조성사업 완료

□ 향후계획

○ ‘22. 7. ~ ’22. 12. : 도막포장 및 표지판 등 시설물 정비

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

목포 관광특구 평화광장 관광지 활성화사업

담당자

도시계획과 조형근(☎270-8873)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목포 관광특구(‘07.9.27.)로 지정된 평화광장 기능개선으로 서남권 최대 도심속 친수공간으로 재창조하여 관광인프라 구축 및 관광객의 만족도 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 12. ~ 2021. 6.

○ 위 치 : 목포시 평화광장 일원

○ 규 모 : 차도와 인도, 녹지공간 재조정 L=1.2㎞, B=40m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000	2,225	2,775	-	-
국 비	867	867	-	-	-
시 도 비	1,633	245	1,388	-	-
시군구비	2,500	1,113	1,387	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘19. 12. 12. : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계용역 착수

○ ‘20.  4.     : 교통영향평가 심의 및 하당지구단위계획 결정(변경)

○ ‘20.  5.     : 건설기술심의 등 공사발주를 위한 행정절차 이행

○ ‘20.  6.     : 공사 착공

○ ‘21.  6. 25. : 목포 평화광장(관광개발, 주차장) 리모델링사업 준공

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

유달동 대반마을 도시취약지역

담당자

도시재생과 나광열 (☎270-3643)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시 취약지역 주민의 기본적인 생활여건 개선을 위해 안전·위생 등 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량 강화 등 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 5. ~ 2022. 12. <4년>

○ 위 치 : 전남 목포시 죽교동 488-13번지 일원

○ 규 모 : A=49,298㎡, 5개 분야 16개 사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,539백만원(국 3,177, 도 408, 시 954)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,539	362	516	3,661	-
국 비	3,177	314	493	2,370	-
시 도 비	408	14	-	394	-
시군구비	954	34	23	897	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 19%)

○ ‘21.  3. : 마을안길 조성공사 실시설계 용역 착수

○ ’21.  7. : 대반마을 내 지적재조사 사업 완료

○ ’21. 12. : 마을안길 및 커뮤니티센터 부지 보상계획 보고

□ 향후계획

○ ’22.  4. : ‘학교법인 석산학원’ 부지 보상협의 방문 및 감정평가 실시

○ ‘22. 7. : 토지 및 부분 편입 지장물 협의보상 추진

○ ’22. 8. : 도시계획시설(도로 등) 결정 고시·공람 후 세부사업 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음.

사업명

수산식품 수출단지 조성사업

담당자

수산진흥과 황용필(☎270-4116)

□ 사업목적 및 필요성

○지역 수산물을 활용한 고부가가치 수산식품산업 육성 및 수출전진 기지      조성으로 수산산업 경쟁력 확보와 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020~2022           * 사업기간 변경 기재부 협의 중

○ 위 치 : 목포시 대양동 1176-1번지외 1필지(대양산단)

○ 규 모 : 부지 28,133㎡, 건축면적 11,114㎡, 연면적 46,616㎡(5층)

○ 사업내용 : 마른김거래소, R&D시설, 냉동‧물류창고, 가공공장, 수출지원시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 108,890 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	108,890	10,708	1,429	14,286	82,467
국 비	71,121	2,394	1,000	10,000	57,727
도 비	15,240.5	513	214.5	2,143	12,370
시 비	22,528.5	7,071	214.5	2,143	12,370

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  40%)

○ `16.  5. : 수산식품 수출단지 조성 연구용역(전라남도)

○ `17.  3. : KDI 예비타당성조사 (면제 -‘19. 1.)

○ ‘19. 7 ~ 10. : 사업계획 적정성 검토 및 중앙투자심사 완료

○ ‘20. 12. : 기본계획 수립용역 완료 및 고시

○ ‘21.  7. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ ‘21.  8. : 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 착수

□ 향후계획

○ ‘22.  6. : 중간설계 적정성 및 경제성 검토 완료(조달청)

○ ‘22.  8. : 기본설계 완료에 따른 기획재정부 총사업비 조정협의(1차)

○ ‘22. 12. : 실시설계 및 기획재정부 총사업비 조정협의(2차) 완료

○ ‘23.  1. ~ : 공사발주를 위한 행정절차 이행

○ ‘23.  6. ~ ‘25.  4. : 공사 착공 및 준공

사업명

대양산단 산업용지 진입도로 개설

담당자

기업유치과 박대건(☎270-4242)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대양일반산업단지는 당초 조선업 등 중공업 중심의 산단으로 획지 계획을 수립하였으나 경기침체에 따른 투자 위축으로 대규모 필지(3,000평∼ 5,000평)에 대한 기업유치가 어려운 상황임.

○ 기업유치를 통한 고용창출 및 지역경제 활성화를 위해 기업들의 입주가 많은 필지면적(800평∼1,500평)으로 획지를 변경하고 진입 도로 개설

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 2. 3. ~ 10. 14.

○ 위 치 : 전라남도 목포시 대양동 1193번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 B=12m, L=860m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  965백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	965	-	965
시군구비	965	-	965	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `20.  6.  1. : 목포대양산단 실시계획변경(안) 입안 검토보고

○ `20.  7.  6. : 목포대양일반산업단지 실시계획변경 승인고시

(목포시 고시2020-193호)

○ `20.  8. 13. : 도로개설 공사 건설기술심의 시행

○ `20. 12. 22. : 계약심사완료

○ `21. 2. 3. ~ 10. 14. : 도로개설 공사 착공 및 준공

사업명

율도 어촌뉴딜 300사업

담당자

해양항만과 강기한(☎270-8328)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌 해상교통시설 현대화 및 핵심자원을 활용한 해양관광 활성화를   통한 어민의 지속가능한 소득기반 창출 및 소득주도성장 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 목포시 율도

○ 규 모 : 공통사업 및 특화사업 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,342백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,342	3,177	4,937	4,228	-
국 비	8,639	2,224	3,456	2,960	-
시 도 비	1,111	286	444	380	-
시군구비	2,592	667	1,037	888	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  50%)

○ `21. 6 : 율도1구 선착장 개선사업 완료

○ `21. 8. : 율도2구 선착장 개선사업 완료

○ `21. 8. : 마을길 정비 등 건립 등 3개사업 실시설계용역 착수

○ `21. 12. : 힐링센터 건립 등 5개사업(건축분야) 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ `22. 12. : 마을안길 정비 등 공사 착공

○ `23.  1. : 율도 어촌마을 경관정비공사 등 착공

사업명

장좌도 접안시설 및 계류시설 설치사업

담당자

해양항만과 강기한(☎270-8328)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌 및 해양 관광 활성화에 기여하여 도서지역 주민의 소득창출과 관광객 편의시설 향상에 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 1

○ 위 치 : 목포시 장좌도

○ 규 모 : 마리나 선박 등 접안 및 계류시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,128백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,128	-	1,128	-	-
국 비	662	-	662	-	-
시 도 비	300	-	300	-	-
시군구비	166	-	166	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ `21. 3. : 장좌도 선착장 조성공사 완료

□ 사업변경 내역(해당 시 작성)

○ 당초 2,000백만원 → 변경 1,128백만원으로 규모 축소

사업명

1897 개항문화 거리 지중화 사업

담당자

건설과 김형중(☎270-3338)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시재생뉴딜사업과 연계한 「1897 개항문화거리 지중화사업」을 추진하여 쾌적한 가로환경 조성과 도시경관 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 목포시 유달동, 만호동 일원

○ 규 모 : 전선 및 통신선 지중화 1.8km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,800	600	4,200	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,600	600	2,000	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	2,200	-	2,200	-	-

□ 추진상황

○ `19. 7. ~ `20. 5. : 지중화사업 확정 및 협약 세부내용 협의

○ `20. 6. ~ `21. 2. : 설계 및 행정절차 이행

○ `21. 3. ~        : 지중화(한전․통신) 공사 착공

□ 향후계획

○ ‘22. 8. : 전선 및 통신선 지중화 준공

○ ’22. 9. : 전선 및 통신선 지중화 정산 및 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

미세먼지 차단 숲 조성

담당자

공원녹지과 임성기(☎270-3514)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대기오염 발생원 주변인 대양산단과 주거지역 주변 옥암수변공원에 미세먼지 차단 대규모의 숲을 조성하여 대기환경을 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022년

○ 위 치

- 대양산단(목포시 대양동 1259번지 일원)

- 옥암수변공원(목포시 옥암동 1396번지 일원

○ 규 모 : 5ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000	1,116	350	3,534	-
국 비	2,500	558	175	1,767	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,500	558	175	1,767	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 대양산단 미세먼지 차단숲 조성 1.2km / 0.6ha

○ 옥암수변공원 미세먼지 차단숲 조성 2.4ha

□ 향후계획

○ 대양산단 미세먼지 차단숲 조성(2단계) 2ha       - 2022년

사업명

관광거점도시 육성사업

담당자

관광거점도시추진단 유상아

(☎061-270-8567)

□ 사업목적 및 필요성

○ 방한 관광객의 지방방문 확산을 견인하는 ‘지방 대표도시 육성’

○ 외국인 관광객이 가고 싶은 ‘모델도시 육성’

○ 지역의 창의적 역량을 강화하고 지속가능한 ‘지역주도형’ 관광 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2025년

○ 위 치 : 5개 권역(원도심, 삼학도+남항, 갓바위, 평화광장, 고하도), 목포시

포함 서남권 9개 시·군

○ 규 모 : 972.82억원(국비 486.41, 도비 194.56, 시비 291.85)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 972,82백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	97,282	4,300	13,000	10,500	69,482
국 비	48,641	2,150	6,500	5,250	34,741
시 도 비	19,456	860	2,600	2,100	13,896
시군구비	29,185	1,290	3,900	3,150	20,845
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 17.8%)

○ 2020년 : 선도사업 추진 완료

○ 2021년 : 관광거점도시 육성사업 추진 중

사업명

서산․온금 재정비 촉진지구 기반시설 조성

담당자

도시문화재과 김현곤(☎270-3434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원도심 대표적인 노후․불량주거지 밀집지역으로 주거환경이 열악하고 낙후된 지역인 서산․온금지역에 도시재정비사업 및 도시기반시설을 확충하여 정주여건을 조성하여 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 3. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 목포시 서산동, 온금동, 금화동 일원

○ 규 모

∙도로(L=3.3㎞, B=6~25m), 상수도(5.5㎞), 하수도(7.0㎞)

∙공원(46,362㎡), 경관녹지(19,485㎡), 주차장(2,364㎡), 전기 및 부대시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 39,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	39,400	10,895	2,359	1,746	24,400
국 비	19,700	5,447.5	1,179.5	873	11,700
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	19,700	5,447.5	1,179.5	873	11,700
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2009. 11 : 서산․온금 재정비촉진지구 지정

○ 2012. 11 : 서산․온금지구 재정비촉진계획 결정

○ 2017. 10 : 재정비촉진지구 및 촉진계획 결정(변경) 고시

□ 향후계획

○ 2022.  9 : 재정비촉진지구 및 촉진계획 결정(변경) 고시

○ 2023. 1 : 서산온금지구 재정비 촉진지구 기반시설 기본 및 실시설계용역

○ 2024. 1 ~ 12 : 실시계획 인가, 공사 착공 및 준공

사업명

전남 스마트공장 테스트베드 구축

담당자

지역경제과 정재원(☎270-4049)

□ 사업목적 및 필요성

○ 실제 세라믹 산업현장과 유사한 환경의 실공장형 테스트베드 구축으로         관내 수요기업 소재 특화 체감형 참조모델 구축 및 제조 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기    간 : 2020 ~ 2021 (2년간)

○ 위    치 : 목포 세라믹산단 내

○ 주관기관 : (재)전남테크노파크 세라믹종합지원센터

○ 내    용 : 기업체감형 세라믹 시험 생산라인 스마트 실증화 기반 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,980백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,980	2,490	5,490	-	-
국 비	4,780	1,490	3,290	-	-
시 도 비	960	300	660	-	-
시군구비	2,240	700	1,540	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 신규사업 추진방안 논의를 위한 관계기관 회의(‘19. 12. 19.)

○ 기재부 검토용 사업계획서(초안) 제출(’19. 12. 23.)

○ 사업계획서 보완·승인·협약체결(‘20. 5.)

○ 공급기업 선정 및 시스템 구축 등 1차년도 사업 추진(’20. 6. ~ 12.)

○ 사업 협약체결 및 2차년도 사업 추진(‘21. 3. ~)

사업명

첨단소재 융합제품 상용화 기반 강화

담당자

지역경제과 정재원(☎270-4049)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역혁신인프라 연계 상용화 지원 플랫폼 구축·운영을 통한 고부가가치       첨단소재 융합제품 상용화 촉진

□ 사업개요

○ 기    간 : 2020 ~ 2022 (3년간)

○ 위    치 : 목포 세라믹산단 내

○ 총사업비 : (재)전남테크노파크 세라믹종합지원센터

○ 내    용 : 플랫품 구축 운영, 장비고도화, 기술사업화 지원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,187백만원

(단위 : 백만원)

구 분		계	집행액		향후 소요액
			기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계		8,187	2,445	4,044	1,698	-
국 비		5,675	1,832	2,906	937	-
시 도 비		548	177	242	129	-
시군구비	목포	426	138	188	100	-
	순천	426	138	188	100	-
	여수	426	138	188	100	-
민간자본	전남TP	608	-	304	304	-
	목포대	39	11	14	14	-
	순천대	39	11	14	14	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 전라남도 주관 평가위원회 1순위 제안사업 선정(‘19. 3.)

○ 산업부 주관 민간전문가 평가위원회 사업 선정(’19. 4.)

○ 사업계획 신청 및 선정(‘20. 4.)

○ 사업수행 협약체결 및 1차년도 사업 진행(’20. 6. ~ 12.)

○ 사업수행 협약체결 및 2차년도 사업 진행(‘21. 3. ~)

사업명

전기추진차도선 및 이동식

전원공급시스템 개발

담당자

지역경제과 정재원(☎270-4049)

□ 사업목적 및 필요성

○ IMO(국제해사기구)의 선박 대기오염에 대한 배출규제 강화 등에 대응하고       지역의 강점을 살린 친환경 선박 산업 생태계 전환 추진

□ 사업개요

○ 기    간 : 2020 ~ 2024 (5년간)

○ 위    치 : 목포 남항 일원 (용해동 1059)

○ 주관기관 : 선박해양플랜트연구소

○ 사업내용 : 전기추진차도선 개발 및 실증, 이동교체식 전원공급시스템 운영기술 개발

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,070백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	45,070	12,350	20,680	4,884	7,156
국 비	26,800	7,220	12,730	2,154	4,696
시 도 비	3,600	1,080	1,440	640	440
시군구비	5,400	1,620	2,160	960	660
민간자본	9,270	2,430	4,350	1,130	1,360

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 기획보고서 작성(아이템 발굴, 지자체 협력 협의)(‘19. 5.)

○ 사업계획 신청 및 선정(‘20. 2. ~ 3.)

○ 친환경선박 생태계 조성 산학연관 업무협약식(’21. 7.)

□ 향후계획

○ 전기추진차도선 건조 완료 및 진수식(‘22. 3.)

○ 남항 연구인프라 구축 착공식(‘22. 하반기)

○ KRISO 연구본부 및 UST 캠퍼스 유치 및 운영(’23. 12. ~)

사업명

성산정신요양원 생활관 개축공사

담당자

노인장애인과

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 및 폐쇄된 시설물의 개축공사를 통해 정신요양시설 설치 기준의 적정성을

확보하고, 시설 거주 정신장애인들의 거주환경 개선 및 서비스 질 향상을 기해

시설물의 안전성을 확보하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 9월 ∼ 2022년 8월(1년 11개월)

○ 위 치 : 전남 무안군 유교길 101

○ 규 모 : 개축 2,165.97㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,621백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,621	30	1,781	1,810	-
국 비	1,810	15	891	904	-
시 도 비	905	7	445	453	-
시군구비	906	8	445	453	-
자부담 (합계 미포함)	181	139	-	42	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○원도급사(건축) 정산 절차 진행중이며, 건축을 제외한 사업 정산 완료.

○하도급사 대표 유고로 인해 하도급사의 집행잔액 공탁절차 진행 완료.

□ 향후계획

○원도급사(건축)의 정산 절차 중 공탁 완료한 하도급사에게 기집행한 직불      금을 인정해 공탁정정신청을 해달라고 함.(협의 조정중)

○생활관 개축공사의 부족한 부분(안전시설물 설치 등)을 2022년 정신건강      증진시설 확충사업 추가공모 사업을 통해 진행하고자 함.

□ 사업변경 내역

○설계변경내용

구 분	당초	변경	증감	내용	비고
1차 (2021.10.25)	1,916,295,300	1,981,727,057	65,431,757	엘리베이터설치, 석고보드교체
2차 (2021.12.15.)	1,981,727,057	2,018,213,232	36,486,175	옹벽 작업 및 우수관로

사업명

구)목포세관창고 활용 복합문화공간 조성

담당자

관광과 임성훈(☎270-8635)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최근 여러 지역에서 근대 시기 건축 자산 및 유휴공간을 활용하여 복합문화

공간으로 조성하는 문화재생사업이 활성화되고 있어, 해당 트렌드 반영 필요

○ 이에 우리시 대표 근대건축자산인 구)목포세관창고를 활용하여 복합문화공간을

조성하고 관광객에게 특색 있는 관광 서비스를 제공함으로써 지역 경제

활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.  7. ~ 2022.  5.

○ 위 치 : 목포시 해안로177번길 10 외 1필지(항동 6-8, 6-33번지)

○ 규 모 : 창고 2개 동과 야외공간

- 큰  창고 : 푸드랩, 중앙라운지, 스몰푸드존(음식 판매공간)

- 작은창고 : 세관역사전시관, 스마트관광플랫폼, 운영관리실

- 야외공간 : 야외무대, 구. 목포세관 본관 터 노출 전시 공간 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   3,580백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,580.0	-	1,004.0	2,576.0	-
국 비	1,888.0	-	600.0	1,288.0	-
시 도 비	520.0	-	4.8	515.2	-
시군구비	1,172.0	-	399.2	772.8	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `20.  7. 28.          : 추진계획 수립

○ `21.  6.  4.          : 공간 디자인 기본계획 수립 및 실시설계 착수

□ 향후계획

○ `22.  2. 18. ~  3. 16. : 시설 명칭 공모 선정

○ `22.  4. 30.          : 시설 준공

○ `22.  6. 22.          : 개관식 개최

○ `22. 8. ~             : 프로그램 운영 및 시설 관리

사업명

생생문화재 사업

담당자

도시문화재과 이원행(☎270-8321)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역사문화공간에서 지역의 인적 물적 자원과 문화재를 결합한 프로그램        (교육,공연,체험 등)을 상설 운영하여 관광 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 4. ~ 2021. 10.

○ 위 치 : 목포근대역사문화공간 일원 등

○ 규 모 : 목포명물 옥단이 잔칫집으로 마실가다, 목포 개항장 시간여행

프로그램 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	100	-	100	100	100
국 비	40	-	40	40	40
시 도 비	12	-	12	12	12
시군구비	48	-	48	48	48
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `21. 3. : 2021년 생생문화재 기본계획 수립

○ `21. 4. ~ 10. : 2021년 생생문화재 홍보 및 행사 추진

□ 향후계획

○ `21. 12. : 2021년 생생문화재 사업 결과 보고 및 보조금 정산

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

구)목포세관 문화재권역 관광 활성화 사업

담당자

도시문화재과 김성찬(8291)

□ 사업목적 및 필요성

○ 근대역사 문화자산을 활용한 체험시설·콘텐츠 제공 및 맛 투어리스트 기능을 복합한 문화공간 조성으로 목포 관광 자원화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년

○ 위 치 : 전라남도 목포시 항동 6-8번지 및 서산동 23-36번지 일원

○ 규 모 : 사업부지 1,848.6㎡, 노출전시 1동, 부대시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000	-	778	1,000	3,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,500	-	389	500	1,500
시군구비	2,500	-	389	500	1,500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2021. 1. : 21년도 본예산 10억원 반영

○ 2021. 3. ~ 2022. 2. : 구 목포세관 본관 터 보존처리 공사 추진

○ 2022. 4. ~ 2022. 6. : 구 목포세관 편의시설 설치공사 추진

□ 향후계획

○ 문화재권역(해안로/원도심 일원) 내 문화재 주변 보수 정비

○ 문화재 장기 보존을 위한 보호시설 설치

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

외달도 섬숲 생태복원사업

담당자

공원녹지과 김현수(☎270-8344)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리시 섬지역은 슬로시티로 지정되었으나 칡덩굴과 잡목이 우거져 경관이 불량하므로 섬숲 생태복원사업을 추진하여 덩굴제거 및 역사문화, 생태 등 다양한 컨텐츠의 테마숲 조성이 필요함

○ 서남해안 관광벨트 구축사업과 연계한 맞춤형 섬숲 가꾸기로 휴식과 힐링의 섬투어 및 슬로시티 기반자원 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2022. 4.

○ 위 치 : 목포시 달동 산143-1번지 일원

○ 규 모 : 10ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,090백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2023년 이후
계	1,090	-	1,090	-	-
국 비	760	-	760	-	-
시 도 비	100	-	100	-	-
시군구비	230	-	230	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `20.  7. ~  :  타당성평가 및 실시설계용역 추진

○ `21.  9. : 전남도 협의 및 용역 중간 및 완료보고 추진

○ `21. 12. : 외달도 섬숲 생태복원사업 착수

○ `22.  4. : 외달도 섬숲 생태복원사업 준공

□ 향후계획

○ `22. 5. ~ 10 : 숲가꾸기 및 제초 등 사후관리 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : 당초 30ha ⇒ 변경 10ha

○ 총사업비 : 당초 3,070백만원 ⇒ 변경 1,090백만원

○ 변경사유 :

- 당초 : 수목식재와 시설물 설치 등 섬 경관 향상을 위한 사업으로 구상 서남해안 경관숲 조성사업으로 사업 신청

- 변경 : 서남해안 섬숲 생태복원사업으로 국비 매칭함.

생태복원 사업은 산림청에서 훼손지 묘목식재를 통한 생태복원사업을 중점 추진토록 요구하고 있음

2022년 사업대상지 산주동의 철회로 인한 사업량 축소

사업명

삼학도 천년의 숲 산림공원 조성

담당자

공원녹지과 임성기(☎270-3514)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대삼학도와 중앙공원을 연결하는 불량경관 구간 재정비를 통한 테마형 천년의 숲을 조성 삼학도공원 관광 랜드마크 공간으로 조성하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2022년

○ 위 치 : 대삼학도 일원(난영공원~중앙공원)

○ 규 모 : 3.5ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,900	-	20	1,880	-
국 비	950	-	10	940	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	950	-	10	940	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 삼학도 천년 숲 산림공원 조성사업 실시설계 용역

※삼학도 테마경관 조성사업 일환사업으로 활성화 방안 연구용역 병행

□ 향후계획

○ 삼학도 천년숲 산림공원 조성 : 2022. 9. ~ 2023. 6

사업명

고하도 해상데크 보행약자

진출입 개선사업

담당자

관광과 김승만(☎270-8217)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경사도 높은 계단으로 연결된 해상데크의 거동 가능한 보행약자에 대한 이동편의 제공 및 접근성 향상을 위한 진출입 여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022

○ 위 치 : 목포시 달동 산191-4(고하도 해안 일원)

○ 규 모 : 경사형 엘리베이터 설치 L=54m(20인승)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,350 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,350	1,100	1,250	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	950	-	950	-	-
시군구비	300	-	300	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	1,100	1,100	-	-	-

□ 추진상황(사업추진중, 진도 : 30%)

○ `21.  4. : 건설기술심의 위원회 심의완료

○ `21.  6. : 토목공사 계약 및 착공

○ `21. 11. : 조달청 관급자재(엘리베이터)계약 및 착수

○ `21. 12. : 전기, 통신공사 계약 및 착공

○ `21. 12. : 편입토지(2필지) 사용(무상)협의 완료

○ `21. 12. : 해역이용 및 공유수면허가 신청

□ 향후계획

○ `22. 2. : 산지전용, 공유수면허가 완료 후 토목공사 착수

○ `22. 6. : 기계실 구조물 설치

○ `22. 7. ~ 8. : 피트실, 레일기초, 엘리베이터 제작설치

○ `22. 9.      : 사업 준공

사업명

세라믹산단 진입도로 개설공사

담당자

도시계획과 조형근(☎270-8873)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산정농공단지와 세라믹산단을 연결하는 도로개설을 통한 원활한 물류 수송 및 산단 경제 활성화를 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 8.

○ 위 치 : 연산동 630-11번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=244m, B=20m(1차분 124m, 2차분 120m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,500	361	1,539	2,600	-
국 비	1,000	361	639	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,500		1,178	2,600	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ ‘20.  3. ~ 10. : 실시설계용역 착수 및 행정절차 이행

○ ‘20. 12.  : 1차분 공사착공

○ ‘21.  8.  : 2차분 공사착공

□ 향후계획

○ ‘22. 08.  : 2차분 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

목포수협 활어위판장 신축사업

담당자

수산진흥과 강찬승(☎270-8327)

□ 사업목적 및 필요성

○ 활어 유통의 경쟁력 강화를 통한 지역경제 발전

○ 어업인 유통질서 의식제고 및 거점 위판장 역할 수행

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2022년 (2년)

○ 위 치 : 죽교동 620-321번지

○ 규 모 : 부지면적 3,909㎡, 연면적 2,171㎡(지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000	-	602	4,398	-
시 도 비	1,500	-	-	1,500	-
시군구비	1,500	-	-	1,500	-
민간자본	2,000	-	602	1,398	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ ‘20. 11. : 목포시 재정투자심사 완료

○ ‘21.  9. : 기본 및 실시설계 완료(목포수협)

○ ‘21. 10. : 비관리청 항만개발사업 실시계획 승인(목포해수청)

○ ‘21. 12. : 공사 착공(목포수협)

□ 향후계획

○ ‘22. 7. : 활어위판장 신축공사 준공(목포수협)

○ ‘22. 8. ~ : 보조금 정산 및 위판장 운영

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분	총 사 업 비
	변경전	변경후	증감
계	5,820	5,000	▽820
시 도 비	2,000	1,500	▽500
시군구비	1,500	1,500
민간자본	2,320	2,000	▽320

○ 변경 사유

가. 민간자본금 중 토지매입 비용 820백만원 감액 (항만법에 의한 토지 무상사용)

나. 매칭 사업비 변경

▻ 당초 - 도비(40%) : 시비 (30%) : 자부담 (30%)

► 변경 - 도비(30%) : 시비 (30%) : 자부담 (40%)

사업명

목포 어묵 세계화 기반구축 및 육성전략

담당자

수산진흥과 오혜련(☎270-3607)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최근 성장하고 있는 어묵시장 개척을 목표로 풍부한 수산물을 활용한 고부가        가치산업 육성을 통해 전국 제1의 수산식품도시 선도

○ HACCP 시설을 갖춘 임대형공장 등 각종 인프라를 구축하여 관련 기업 및       창업 육성을 통한 지역경제 활성화와 일자리 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년

○ 위 치 : 목포시 대양동 1180-17(대양산단)

○ 규 모 : 부지 5,610㎡, 건축면적 2,428㎡(1층 예정)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,000	-	1,559	920	7,521
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,000	-	52	762	4,186
시군구비	5,000	-	1,507	158	3,335
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2021년 전남형 지역성장 전략사업 최종선정 : ‘20. 8. 20.

○ 2020년 2차 전라남도 지방재정 투자심사 : ‘20. 11.

○ 목포어묵 HACCP 가공공장 구축을 위한 부지매입 : ‘21. 6. 29.

○ 목포어묵사업 기본계획 수립 용역 : ‘21. 9. ~ ‘22. 5.

□ 향후계획

○ 목포어묵 HACCP 가공공장 건립사업 기본 및 실시설계 용역 : ‘22. 7. ~

○ 목포어묵 HACCP 가공공장 착공 : ‘23. 1.

사업명

목포 문화재야행

담당자

도시문화재과 이원행(☎270-8321)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화재가 밀집된 공간에서 야간문화 향유 및 수요지 중심의 고품격 문화       유산 활용 행사를 실시하여 지역 명소화 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 10. 8. ~ 2021. 10. 10.

○ 위 치 : 목포근대역사문화공간 일원

○ 규 모 : 근대문화재를 활용한 공연, 전시, 체험 프로그램 운영 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 372.5백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	372.5	-	372.5	665	650
국 비	149	-	149	266	260
시 도 비	44.7	-	44.7	79.8	78
시군구비	178.8	-	178.8	319.2	312
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021. 3. : 2021 목포 문화재 야행 기본계획 수립

○ 2021. 6. : 2021 목포 문화재 야행 세부 추진계획 수립

○ 2021. 10. : 2021 목포 문화재 야행 행사 개최

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 2021 목포 문화재 야행 행사 결과 보고 및 정산

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

2021 목포해상W쇼

담당자

관광과 김효승(☎270-8431)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대한민국 대표 체류형 야간관광 콘텐츠로 자리매김함에 따라 더욱 업그레이드 된 콘텐츠 운영으로 국제해양 관광도시 브랜드 가치 제고 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년 <3년간>

○ 위 치 : 평화광장 춤추는 바다분수 해상무대 일원

○ 규 모 : 해상무대 뮤지컬 ＋ 춤추는 바다분수 + 불꽃쇼

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,350	-	866	684	800
국 비	1,175	-	433	342	400
시 도 비	470	-	173	136	160
시군구비	705	-	260	206	240
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ `21. 9월 ~ `22. 8월, 목포해상W쇼 총 25회 공연 운영

(코로나19로 인해 21년도 사업 기간 연장하여 22. 8월까지 추진 완료)

□ 향후계획

○ 2022 대행사 선정 입찰 공고     : ‘22. 5. 11. ~ 5. 25.

○ 2022 제안서 평가위원회 개최    : ‘22. 5. 27.

○ 2022 목포해상W쇼 협상 완료    : ‘22. 8. 31.

○ 2022 목포해상W쇼 추진(총 10회) : ‘22. 9월 ~ 11월

□ 사업변경 내역

○ 2021 변경계약 체결(사업기간 연장 ‘21. 12월말 → ‘22. 6월말) : ‘21. 12. 29.

(코로나19로 인한 공연 미개최분 추진을 위한 사업기간 연장)

○ 2021 변경계약 체결(사업기간 연장 ‘22.  6월말 → ‘22. 8월말) : ‘22.  6. 29.

(주 2회 공연 ⇒ 주 1회 공연 변경으로 인한 사업기간 연장)

사업명

목포 항구축제

담당자

관광과 유진희(☎270-8431)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 목포항과 삼학도를  중심으로 바다위 어시장이었던 파시(波市) 장터를 재현하며         만선의 기쁨이 가득한 목포를 축제로 구현

◦ 지역 수산물과 수산업의 발전을 유도하고, 지역브랜드 가치를 높여 관광       산업 육성 및 다양한 수산물 상품을 개발하여 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ∼2023년 <3년간> 매년 10월중 개최

○ 위 치 : 목포항 및 삼학도 일원

○ 규 모

- 시설 : 주무대, 프린지무대, 어등 터널, 부스, 화장실 등

- 프로그램 : 파시 로드, 어생 그랜드 세일, 풍어파시길놀이, 체험, 불꽃쇼 등

- 홍보 : TV광고, SNS, 언론사, 배너, 각종 홍보물 발행

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,200	-	202	798	1,200
국 비	1,100	-	101	399	600
시 도 비	440	-	40.4	159.6	240
시군구비	660	-	60.6	239.4	360
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ `21. 10. 14. ~ 10. 17. : 2021 목포항구축제 개최(전면 온라인)

□ 향후계획

○ `22. 10. 14. ~ 10. 16. : 2022 목포항구축제 개최

사업명

2021 목포문학박람회

담당자

문화예술과 홍미희(☎270-4051)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문학을 주제로 축제와 박람회를 연계해 문학박람회를 개최하여 문화의 도시브랜드 확보 및 문학의 관광자원화로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 10. 7(목) ~ 10.(일)【4일간】

○ 위 치 : 3개 권역(목포문학관 일원, 평화광장, 목원동 일원)

○ 내 용 : 축제와 박람회 연계한 문학 행사, 전시, 4인4색문학제, 공연,

체험, 웰니스테라피존, 문학관광상품 운영 등 총 109개 프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,500 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,500	-	1,500	-	-
국 비	500	-	500	-	-
시 도 비	700	-	700	-	-
시군구비	300	-	300	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `21. 8. : 목포문학박람회 성공개최 유관기관 업무협약

○ `21. 10.: 목포문학박람회 109개 프로그램 추진

○ `21. 11.: 목포문학박람회 성과 평가

□ 향후계획

○ 2023 문학박람회 개최 준비 및 행사 개최

사업명

고하도항, 응박개항 어촌뉴딜300

담당자

해양항만과 강기한(☎270-8328)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌 해상교통시설 현대화 및 핵심자원을 활용한 해양관광 활성화를   통한 어민의 지속가능한 소득기반 창출 및 소득주도성장 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 목포시 고하도

○ 규 모 : 공통사업 및 특화사업 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,341백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,341		2,467	4,936	4,938
국 비	8,638		1,727	3,456	3,457
시 도 비	1,111		222	444	444
시군구비	2,592		518	1,036	1,037
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ `21. 4. : 공통사업(고하도항 선착장 정비사업 실시설계) 착수

○ `21. 12. : 기본계획 고시

□ 향후계획

○ `22. 10. : 고하도항 공공건축물 설계용역 착수

○ `23. 3. : 고하도항 선착장 정비사업 착공

사업명

목포시립도서관 독서문화 환경 조성

담당자

문화예술과 안영옥(☎270-4042)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 목포시립도서관(1989. 6.신축)을 시민친화적인 공간으로 조성하기       위한 리모델링 추진

□ 사업개요

○ 대 상 : 목포시립도서관

○ 기 간 : 2021~2022

○ 위 치 : 목포시 용당로160번길 32

○ 규 모 : 대지면적 9,607㎡  연면적 5,742.91㎡ (지하1층, 지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,000	-	75	1,925	-
국 비	800	-	75	725	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,200	-	-	1,200	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 추진계획 수립, 투자심사(자체) 및 설계용역 착수    : `21. 3. ~ 5.

○ 계약심사(건축 공사분) 및 설계용역 완료           : `21. 12.

□ 향후계획

○ 공사 착공                                 : `22. 1.

○ 건축공사(1차분) 준공                       : `22. 6.

○ 건축공사(2차분) 준공                       : `22. 8.

사업명

수산물 유통센터 건립

담당자

수산진흥과 김혜숙(270-3798)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어획량 증가 및 관내 제빙공장 페업에 따라 부족한 시설을 확충하여        산지 유통기능 강화 및 유통구조 개선 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2022

○ 위 치 : 목포시 죽교동 674-3

○ 규 모 : 연면적 5,151㎡, 지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	19,200	-	820	18,380	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	9,600	-	410	9,190	-
시군구비	4,800	-	205	4,595	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	4,800	-	205	4,595	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 64%)

○ 타당성 조사 용역(목포수협)             : ‘20. 11 ~ ’21. 2

○ 전라남도 지방재정 투자심사            : ‘21. 5.

○ 항만공사 시행허가 승인(해수청)        : ‘21. 10.

○ 사업계획 변경 승인(전라남도)

- 사업규모 축소(6,600→5,151m2)       : ‘21. 11.

□ 향후계획

○ 공사 준공(목포수협)                    : ‘22. 11.

사업명

죽교동 샘골마을 도시취약지역

담당자

도시재생과 나광열 (☎270-3643)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시 취약지역 주민의 기본적인 생활여건 개선을 위해 안전·위생 등 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량 강화 등 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 24 ~ 2024. 12. <4년>

○ 위 치 : 전남 목포시 죽교동 86-11번지 일원

○ 규 모 : A=14,547㎡, 5개 분야 22개 사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,473백만원(국 3,131, 도 403, 시 939)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,473	-	87.5	1,347.5	3,038
국 비	3,131	-	87.5	916.5	2,127
시 도 비	403	-	-	130	273
시군구비	939	-	-	301	638
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ ‘21.  8. : 마스터플랜 수립 용역 착수

□ 향후계획

○ ‘22.  1. : 주민협의체 모집 완료(11명)

○ ‘22.  5. : 마스터플랜 제출(시⇒전라남도), 관계부서 및 유관기관 협의

○ ‘22.  7. : 국토부 검토위원회 상정 및 마스터플랜 수립 확정

○ ‘22.  7. : 우선 사업추진(공폐가 정비 등) 및 세부사업(실시설계) 추진

사업명

친환경선박 혼합연료 기술개발 및 실증

담당자

지역경제과 정재원(☎270-4049)

□ 사업목적 및 필요성

○ 친환경 대체연료 신기술의 선박 적용성과 신뢰성 및 안정성을 확보, 검증할       수 있는 해상 테스트베드 활용으로 산업 활성화 및 국제 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기    간 : 2021 ~ 2025 (5년간)

○ 위    치 : 목포 남항 일원 (용해동 1059)

○ 주관기관 : 선박해양플랜트연구소

○ 사업내용 : 친환경 혼합연료 기술개발, 신기술 실증지원 해상 테스트베드 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 41,480백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	41,480	-	7,530	10,400	23,550
국 비	29,000	-	5,700	7,300	16,000
시 도 비	4,000	-	720	880	2,400
시군구비	6,000	-	800	1,490	3,710
민간자본	2,480	-	310	730	1,440

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 신규과제 기획 협의차 해수부 방문(‘19. 12. 19.)

○ 지정과제 공고 및 응모(’21. 2. ~ 3.)

○ 사업수행기관 선정평가(전담기관⇒신청기관)(‘21. 3.)

○ 사업수행 협약체결 및 1차년도 사업추진(’21. 4. ~)

○ 제3차 지방재정투자심사(행정안전부)(‘21. 6.)

○ 대체연료 해상실증 기법 및 절차 개발(’21. ~ ‘23.)

□ 향후계획

○ 해상 테스트베드 구축 및 실증 운영(’22. ~ 25.)

사업명

산지위생안전시스템 구축사업

담당자

수산진흥과 임정백(☎061-270-3671)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산지에서 소비지까지 수산물 위생안전 체계 구축으로 신선하고 안전한        수산물 공급기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2022년

○ 위 치 : 목포시 죽교동 674-3

○ 규 모 : 저온위판장 구축, 자동선별기 4대 도입

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,660 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,660	-	810	2,850	-
국 비	1,698	-	273	1,425	-
도 비	219.6	-	48.6	171	-
시 비	878.4	-	194.4	684	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	864	-	294	570	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ `21. 4. : 산지위생안전시스템 구축사업 공모 선정

○ `21. 9. : 자체 지방재정 투자심사 완료

○ `21. 2. : 비관리청 항만공사 시행허가 신청

□ 향후계획

○ `22. 3. : 자동선별기 물품 제작 착수

○ `22. 4. : 저온위판장 착공

○ `22. 8. : 자동선별기 검수 및 납품

○ `22. 10. : 저온위판장 준공 및 업무 개시

사업명

2021 목포항구버스킹

담당자

문화예술과 김유빈(☎270-8511)

□ 사업목적 및 필요성

○ 실력있는 버스커 모집으로 수준높은 공연 추진하고 목포만의 특색있는         버스킹을 기획·운영하여 관광활성화 및 문화도시브랜드 구축에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘21. 11. 5(금) ~ 11. 14(일) ※정부방침(축제금지)에 따라 11월 2주간만 추진

○ 위 치 : 근대역사1관 입구(2시), 목포항구포차(5시)

○ 출 연 : 10회, 50개 버스킹팀

○ 내 용

- 7080, 재즈, 가요, 팝 등이 어우러진 다양한 장르 공연

- 버스킹 홍보 SNS이벤트 개최

- 공연 스케치영상 제작 및 SNS송출

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 660백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	660	-	60	300	300
국 비	300	-	-	150	150
시 비	180	-	60	60	60-
도 비	180	-	-	90	90

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `21.  3. : 2021 목포항구버스킹 참가자 공개모집 및 선정

○ `21. 11. : 목포항구버스킹 추진

○ `21. 12. : 결과보고 및 설문조사를 통한 피드백, 2022 사업반영

□ 향후계획

○ `22.  5. : 참가자 공개모집 및 선정

○ `22.  7. : 목포항구버스킹 추진

○ `22. 12. : 결과보고 및 설문조사 등 모니터링

사업명

용당1동 공영주차장 주차타워 조성

담당자

교통행정과 정경만(☎270-8293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상가 및 다세대주택 밀집 지역으로 주차 공간이 매우 부족한 실정으로 원활한 교통 소통과 주민들의 편의도모를 위해 주차타워 조성 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1월 ~ 2023. 6월

○ 위 치 : 용당동 965-25번지 외 3필지(용당1동행정복지센터 옆)

○ 규 모 : 지상 3층(4단) / 200면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원(국1,500/시1,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000	-	-	1,500	1,500
국 비	1,500	-	-	750	750
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,500	-	-	750	750
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

○ `20. 11월 : 2021~2025 중기지방재정계획 반영

○ `21.  2월 : `22년 주차환경개선지원사업(균특) 예산 신청

○ `21.  9월 : 지방재정 투자심사

○ `21. 12월 : 주차타워 조성사업비 반영(`22년 본예산 / 균15억원, 시15억원)

○ `22.  2월 : 실시설계용역 착수    * 일시정지 중 : `22.4.23. ~ 현재

□ 향후계획

○ `22.  4월 : 주민설명회 개최(4.7/용당1동 행정복지센터)

○ `22.  6월 ~ 10월 : 토지매입 등을 위한 행정절차 추진

- 도시관리계획(변경), 보상, 사업계획(변경) 등

○ `22. 12월 : 실시설계 완료

○ `23.  6월 : 공사 완료

사업명

서남권 뮤지엄페어

담당자

자연사박물관 박윤철(☎4105)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서남권 문화권의 연계를 통해 하나된 콘텐츠를 개발하여 주민들의 문화 갈증 해소 및 서남권 대표 박람회로 육성

○ 독립적으로 운영되던 서남권 박물관 · 미술관의 문화자원을 갓바위 문화권을 중심으로 연계하여 관광자원 개발 및 홍보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2024. <4개년>

○ 위 치 : 목포자연사박물관 일원

○ 규 모 : 서남권 박물관 미술관 연계 전시 및 체험콘텐츠 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	678	-	78	200	400
국 비	339	-	39	100	200
시 도 비	339	-	39	100	200
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  50%)

○ 21년도 뮤지엄페어 운영 완료 (‘21. 10. 8. ~ 10.)

○ 22년도 뮤지엄페어 운영 예정 (’22. 9. 30. ~ 10. 2.)

□ 향후계획

○ ‘23 ~ ’24년도 뮤지엄페어 추진 (매년 하반기 예정)

10-2. 지방채 발행사업

우리 목포시에서 ‘21년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
장기미집행 공원일몰제 토지보상	26,400	10,000	-	16,400	-	-	10,000	30
목포권 광역위생매립장 순환이용 정비사업	33,964	10,000	16,100	-	7,864	-	10,000	85.3
대양일반산업단지 미분양 용지 매입	80,000	80,000	-	-	-	-	80,000	-

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2021년에 추진한 사업

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

장기미집행 도시계획시설

(도시공원) 토지보상

담당자

공원녹지과 임혜경(☎270-3632)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시계획시설에 따른 사유재산권 침해 최소화와 토지 보상       민원의 해소, 미래자원의 확보를 통한 지속 발전 가능한 토대 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘20. 7. ~ ’25. 6.

○ 위 치 : 3개소(갓바위근린공원, 유달근린공원, 양을산근린공원)

○ 규 모 : 453필지, 449,846.9㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	26,400	-	50	10,950	15,400
지 방 채	10,000	-	50	9,950	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	16,400	-	-	1,000	15,400
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ ‘20. 6. 30.         : 실시계획인가 고시

○ ‘21. 6. 29. ~ 7. 13. : 보상계획 열람 공고(1단계)

○ ‘21. 10. ~ 12.      : 감정평가 완료(1단계)

□ 향후계획

○ ‘22. 1. ~ 7.         : 보상비 책정 및 보상협의(1단계)

○ ‘22. 8. ~ 12.        : 보상협의 및 미협의건 토지수용 재결

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

목포권 광역위생매립장 순환이용 정비사업

담당자

자원순환과

이태양(☎270-8585)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매립장의 사용연한이 도래하고 있으나 신규 매립지 확보가 어려우므로 사용

중인 매립장 일부를 굴착 후 재사용함으로써 사용기간 연장

□ 사업개요

○ 기   간 : 2016년 ~ 2022년

○ 위   치 : 목포시 대양로 241-41 일원(목포시 위생매립장 내)

○ 규   모 : 폐기물 굴착 516,000㎥, 선별 645,000㎥, 매립장 조성 34,778㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,964백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	33,964	17,727	8,857	2,953	4,427
국 비	16,100	9,863	2,495	1,400	2,342
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,864	7,864	-	-	-
지 방 채	10,000	-	6,362	1,553	2,085
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85.3%)

○ `16.  3. : 지방재정투자사업 중앙심사 완료

○ `18. 10. : 기본 및 실시설계 용역 · 도 건설기술심의 완료

○ `19.  9. : 시설공사 계약체결 및 착공

○ `20.  5. ~ : 폐기물 굴착·선별 및 압축·포장

□ 향후계획

○ `22.  9. : 차수재 보수 및 설치(매립장 조성)

○ `22. 12. : 매립폐기물 굴착·선별 및 압축·포장작업 준공

사업명

대양일반산업단지 미분양 용지 매입

담당자

기업유치과 이명숙(☎270-8133)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대양일반산업단지 내 미분양 용지 매입으로 목포시 부담이자 절감

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2026년

○ 위 치 : 목포시 대양동 1180-3번지 외 41필지

○ 규 모 : 295,474.4㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 80,000백만원

- 지방채 : 공공자금(지역개발기금) 500억원, 민간자금(기업은행) 300억원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	79,980	79,980	-	-	-
지 방 채	79,980	79,980	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘18. 08. : 지방채 발행 승인 신청

○ ‘18. 11. : 지방채 발행 승인(행정안전부)

○ ‘18. 12. : 2019년 지역개발기금 융자 결정 통보(전라남도)

○ ‘19. 03. : 제346회 목포시의회 임시회 지방채 발행 승인

○ ‘19. 05. : 지방채 발행

○ ‘19. 06. : 미분양 용지 매입(295,474.4㎡, 79,980백만원)

□ 향후계획

○ 매입 용지 분양 및 지방채 상환

- 공공자금(지역개발기금) 500억원 3년 거치 5년 균등상환 (이자 연 2.0%)

· ‘22. 3. 100억원 조기상환 : 원금 300억원 → 200억원

· 만기일 2026. 5. 31.

- 민간자금(기업은행) 300억원 3년 거치 만기 일시상환(이자 연 1.896%)

· 만기일 2022. 5. 31.

10-3. 민간투자사업

우리 목포시에서 ‘21년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2021년	2022년	2023년 이후
BTL	`05BTL	푸른목포환경(주)	50,294	56,473	4,757	4,771	34,991	2006.6. ~ 2010.4.
	`06BTL	맑은목포환경(주)	65,935	63,349	6,685	6,873	63,048	2008.8. ~ 2012.1.
	`09BTL	청정목포환경(주)	32,301	24,484	3,284	3,338	36,941	2011.2. ~ 2013.10.

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2021년까지는 집행액(결산기준), 2022년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

`05년 BTL 사업

담당자

하수과 신동원(☎270-8664)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해·북항처리구역을 민간투자방식(BTL) 사업으로 하수관거 정비를 통하여 하수기능 극대화와 하수처리 효율 제고 및 생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기    간 : 2006. 6. ~ 2010. 4.

○ 위    치 : 용당동, 연동, 동명동, 삼학동 일원

○ 민간사업자 : 푸른목포환경(주)

○ 총사업비 : 50,294백만원

○ 사업규모 : 관거정비 L=63.3km, 배수설비 3,205개소, 내항펌프장 1동

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	100,992	56,473	4,757	4,771	34,991
국 비	63,903	36,015	3,006	3,006	21,876
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	37,089	20,458	1,751	1,765	13,115
기 타	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영중

□ 향후계획

○ 사업 시행사에서 관리운영기간(20년)동안 하수관거 유지관리

○ 분기별 운영 성과평가 후 시설임대료 및 운영비 지급

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

`06년 BTL 사업

담당자

하수과 신동원(☎270-8664)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해·북항처리구역을 민간투자방식(BTL) 사업으로 하수관거 정비를 통하여 하수기능 극대화와 하수처리 효율 제고 및 생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012. 1. ~ 2032. 1.

○ 위    치 : 용당1,2동, 용해동, 연동, 상동 일원

○ 민간사업자 : 맑은목포환경(주)

○ 총사업비 : 65,935백만원

○ 사업규모 : 관거정비 L=49.8km, 배수설비 705개소, 용당우수저류조 1개소

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	139,955	63,349	6,685	6,873	63,048
국 비	88,286	40,403	4,237	4,334	39,312
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	51,669	22,946	2,448	2,539	23,736
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영중

○

□ 향후계획

○ 사업 시행사에서 관리운영기간(20년)동안 하수관거 유지관리

○ 분기별 운영 성과평가 후 시설임대료 및 운영비 지급

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

`09년 BTL 사업

담당자

하수과 신동원(☎270-8664)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해·북항처리구역을 민간투자방식(BTL) 사업으로 하수관거 정비를 통하여 하수기능 극대화와 하수처리 효율 제고 및 생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013. 10. ~ 2033. 10.

○ 위    치 : 원산동, 연산동, 산정동 일원

○ 민간사업자 : 청정목포환경(주)

○ 총사업비 : 32,301백만원

○ 사업규모 : 관거정비 L=19.3km, 배수설비 1,039개소, 우수박스 678m

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	68,047	24,484	3,284	3,338	36,941
국 비	40,487	14,983	1,994	1,994	21,516
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	27,560	9,501	1,290	1,344	15,425
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영중

□ 향후계획

○ 사업 시행사에서 관리운영기간(20년)동안 하수관거 유지관리

○ 분기별 운영 성과평가 후 시설임대료 및 운영비 지급

□ 사업변경 내역

○ 해당없음